「2023 진주실크소재 빅데이터 기반구축사업」

『진주실크소재 빅데이터 연구실』

인테리어 공사 과업제안서

2023. 9.

	한국실크연구원 KOREA SILK RESEARCH INSTITUTE

1. 과업개요

□ 과 업 명 : 진주실크소재 빅테이터 연구실 인테리어 공사

□ 설치장소 : 경남 진주시 문산읍 월아산로 996번길 5(한국실크연구원 1층회의실 내)

□ 면    적 : 약12py(39.66㎡)

□ 공간구성 : 컴퓨터 작업 공간(장비 3set, 스캐너, 물성키트), 소재디스플레이 공간, 상담 공간, 원단작업대

- 현장 여건을 고려하여 발주처와 협의하여 조정할 수 있음

□ 과업기간 : 계약체결일부터 1개월이내

□ 과업예산 : 금39,000,000원(금삼천구백만원), 부가세포함

2. 과업목적

□ 진주실크 소재 빅데이터 및 디지털(3D) 플랫폼 구축을 위한 연구실 및 작업공간을 조화하여 공간 구성

□ 최신 인테리어 트렌드를 반영한 사용자 및 고객의 효율적인 동선을 고려한 배치

3. 주요 과업내용

□ 과업범위 : 설계 및 시공

□ 주요내용

작 업 명	내 용	비 고
기획 및 설계	공간구성 및 인테리어	2D/3D 시뮬레이션
벽면공사	전체 벽면 공사
	작업공간벽면 사업 및 장비설명 부착	벽면 4개(약60×90㎝)
	연구실명 기재 및 설치	벽체 및 간판 등
바닥공사	바닥 타일 등 공사
천정공사	천정시공	도색 및 도장 등
전기 조명공사	라인조명, 레일조명, LED 등	전선정리, 렌선 등
전시공간 설치	원단 행잉 및 디스플레이 전시대 및 수납함	이니셜 등 SIGN 포함
가구 및 목공	컴퓨터 작업용 테이블 및 의자 3set 수납장 및 서랍장	테이블 : PC 3SET(모니터, 본체), 장비탑재(스캐너2, 물성키트1)
	원단 작업용 테이블 및 의자	원단컷팅, 다림질, 수납 등
	테이블 및 의자	회의 및 상담용
	연구실내 공간 구분	파티션, 칸막이 공사 등
도어/중문 설치	회의실과 빅데이터 연구실 분리	유리, 슬라이딩 도어 등
기타	천정바닥 철거공사, 폐기물처리, 청소 등	부대비용 포함

4. 작성요령

□ 제안서에 설계도 등 도면일체 포함되어야 함

- 조감도(정면도, 좌우측면도, 배면도, 입면도, 배치계획도), 공간계획, 재료계획, 시공계획, 기타 특이사항 등을 자유롭게 기재

□ 주요 과업내용을 충족하되 건축법 및 관련법규에 위배되지 않도록 설계

5. 추진일정

내 용	일 정
입찰공고(제안서 접수)	- 공고기간 : 2023. 9. 5(화) ~ 2023. 9.18(월)
평가위원회개최	- 평가위원회개최 9.21(목)
용역기관 선정 및 계약체결	- 평가위원회 실시 후 일주일 이내
설계 및 시공	- 10월초

※ 일정은 기관의 사정에 따라 변경될 수 있음